연구용역 수행계획서

2004. 12

(사)한국지반공학회

1) 연구용역 제목 : 탄도항 물양장 시설공사 관련 기초지반 붕괴로 인한 설계내역 및 시공 검토 연구

2) 과업의 내용 및 범위

경기도 안산시 선감동 탄도항 어항개발 공사에서 물양장시설 블록 거치 후 배후부지에 토량 매입하여 토공작업을 하는 도중 뒤채움 흙의 토압에 의해 활동전단파괴가 발생된 것으로 추정되는 바 지반변형이 있어 본 공사의 설계내역 및 시공에 관해 검토 분석하고, 이에 대한 대책공법을 제안하는 것이 본 과업의 주된 목적이며 이를 위해

① 현장답사 및 자료검토

② 현장지반조사 및 시료채취, 실내시험 실시와 결과분석

③ 사고원인 검토 및 분석

④ 대책공법 제시

⑤ 보고서 작성 및 제출

3) 과업 수행기간

본 건과 관련된 제반자료(현장지반조사 및 실내시험 성과물 포함)를 제출받고, 총 과업비용의 50%를 지급한 날을 계약일로 하여, 계약일로부터 60일로 한다.

4) 과업 수행비용

총 오천팔백만원정(￦58,000,000)

※ 요구가 있을 경우 내역을 제출할 예정임.

5) 과업 수행연구진

윤길림(한국해양연구원, 연구위원)

채영수(수원대학교 교수)

강인성(수원과학대학 교수)

6) 기타조건

․ 현장지반조사와 실내시험 성과물은 위탁자가 실시하여 연구진에게 제출토록 하는 것을 원칙으로 한다.

․ 결과물은 보고서 형태로 제출하여, 부수는 협의에 의거 추후 결정토록 한다.